한국세무사회 자격시험

CBT시스템 개발 제안요청서

2025. 10. 14.

목      차

Ⅰ. 사업개요	1

Ⅱ. 과업별 세부내용	2

Ⅲ. 입찰 및 평가 관련	28

Ⅳ. 제안서 작성 및 제출	30

<붙임> 입찰관련 서식

Ⅰ. 사업개요

1. 사업명: 한국세무사회 자격시험 CBT 시스템 개발

2. 사업목적

❍ 전산세무회계 등 자격시험의 보안 강화, 관리사고 예방 및 효율화를 위하여 CBT(Computer Based Test) 시험방식을 도입

3. 사업기간

과업범위	과업내용	과업기간(월)
		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
CBT시스템	시험지 전용 뷰어	■	■	■	■
	케이렙 제어(실행/종료/답안전송)	■	■	■	■
	필기전용 CBT 프로그램		■	■	■
	응시자 모니터링(부정행위, 시간관리 등)		■	■	■
	자료배포 관리(유의사항, 시험자료)		■	■	■
	답안 제출 내역 확인		■	■	■
	테스트 완료 및 결과 보고					■
문제은행식 DB시스템	문항 등록 관리 기능					■	■	■
	문항검토관리 기능							■	■	■
	문항 출제, 수정 기능			■	■	■	■	■	■	■
	CBT시스템 연동 (선택)								■	■
IBT시스템 개발	공지, 시험지(암호화) 등 전송 확인								■	■
	고사장 시험실별 응시자 연동								■	■
	답안 취합 및 오류 확인 등								■	■
결과보고	전 사업 결과보고					■				■

: 계약 체결일 ~ 2026. 6. 30.

※ 문제은행식DB 및 IBT 시스템 적용 시기는 업체 제안 및 협의에 변경 될 수 있음.

4. 사업예산: 금이억원(￦200,000,000)

○ 위 예산은 제안 및 협의에 따라 조정될 수 있음

5. 계약방법: 일반경쟁입찰(우선협상대상자 선정, 협상에 의한 계약)

Ⅱ. 과업별 세부내용

1. 과업 범위 및 주요 기능

과업	기능 구분	주요 기능
CBT 시스템	CBT프로그램 커스터마이징	○ 전산세무회계등 자격시험 CBT시행에 최적화 되도록 프로그램 커스터마이징 수행 - 시험 명칭 변경, 종목 신설, 문제 유형 변경 등에 대처 - 케이렙 및 시험지 뷰어 크기 조절 기능 - 장애 처리 기능(PC오류 및 자리 이동 시 이어 풀기 기능)
	시험 자료 배포 관리 시스템 개발	- 해당 수험생의 급수에 맞춰 시험문제 전송 및 수험생 확인 (오류PC 자리 이동 기능) ※ 감독관 시험지 파일 암호화로 수험생이 감독관 확인 번호 입력 시 문제 확인 가능 - 시험지와 답안(프로그램) 뷰어 비율을 수험생 불편이 없도록 적절히 배치(기본세팅, 분할 비율 선택 조정 가능) - 문제 글자 크기 조절(저시력자 편의 제공) - 시험 중 감독관이 문제 수정 기능(공지 등 포함)
	응시자 모니터링 시스템 개발	- 개별 시험종료 시간 처리, 응시 현황, 답안 제출 내역 등 표기 - (자격시험 관리 시스템 연동) 고사실별 배정표 업로드 및 변경 - 해당 고사실별 응시·결시 체크(자동 방식, 감독관 수정 기능) - 감독관이 문제 및 수험용 케이렙 프로그램, 답안 파일 전송(수험생 급수에 맞춰), - 수험자 PC 관리 기능, 부정행위자 종료, 이어풀기 및 PC 변경 대응, 좌석 배치 변경, 금지된 프로그램 비활성화, 그 밖에 시험 진행에 필요한 기능 등
	답안 파일 관리 시스템	- 수험생 답안 파일을 감독관 PC로 전송 (저장을 누를 때마다 / 수험생 PC에 실시간 자동백업) - 답안 전송 이력 확인 및 답안 내용 LOG 파일 등 (다수의 백업파일과 제출 시 최종파일) - 전송 중 오류 없도록 검사(시험종료 후에도 수험생 PC에 저장) - 시험 중 자리 바꿔주기 기능(현재까지 작성한 답안 파일로 새로운 PC에서 진행(실시간 백업 전송, 현재의 내보내기 가져오기 기능을 지원) - 응시자 PC화면 녹화 및 재생 등 민원 사항 대응 - 1교시: 시험화면에서 답안 선택시 OMR에 반영, 텍스트 입력시 OMR 반영 (OMR 별도 입력도 가능) - 2,3교시: 1교시에 비해 용량이 큼, 불량답안 자동검사 - IBT 도입 후 수험생 답안 등을 서버로 전송 기능
	관리 시스템 연계 등	- 자격시험관리시스템과 연동 (고사장별, 시험실별 업로드, 수정 기능 포함, 채점 및 합격자 발표와 연동) - 시험실별 응시 결시 체크 파일(고사장별 일괄 출력 기능) - 시험 종료 후 시험장 초기화 * 감독위원 등 CBT활용 교육 및 영상 등 제공 필수 제안 * 150개 이상 고사장 실별 사전 TEST 및 설치 지원 제안
	CBT보안 시스템	- 시험문제·답안 전송 암호화 - 해킹·바이러스 대응 및 긴급 복구 방안 - 장애 대비 기능 및 대처방안 제안
문제은행 DB시스템	문제은행DB 시스템 개발	○ 종목별 급수별 시험문제를 저장, 분류하고 출제할 수 있는 문제은행 시스템 개발 - 기존 및 신규 종목의 시험 데이터(문제, 답안, 결과 등)와 문제은행DB 시스템 연계 기능 구현 - CBT관리 시스템과 연동하여 시험문제 전송 - 시스템 내에서 시험문제의 출제, 선정 및 수정 가능 (출제위원회 내부 활용 병행 선택 가능) 기능수행에 필요한 H/W 제안
IBT 시스템	IBT시스템 개발	○ 본부 서버에서 고사장 시험실별-수험자별 응시현황 집계 및 답안 파일 등 취합 (* 비대면 시험방식은 필수는 아니며, 제안 가능) - 전국 시험 진행 현황을 실시간으로 모니터링(응시인원, 응시율, 시험 진행 과정 등) - 시험실별 문제와 답안파일 전송(감독관 프로그램 및 수험생 프로그램) - 수험생 답안과 화면녹화 파일을 중앙서버로 직접 취합 관리 - 정·오답 표시 기능을 통한 실시간 합격 여부 기능 (기능 지원 필수, 과목별 적용은 병행 또는 선택, 필기형과 실무형 구분 필요) - 문제은행DB 시스템 및 CBT시스템 연계 방안 기능수행에 필요한 H/W 제안

2. 기능 요구사항

아래 요구사항 목록에 누락 되어 있더라도 CBT시스템, 문제은행 DB시스템, IBT시스템의 필요 기능에 포함되거나 필수 연계된 기능의 경우 개발에 포함하여야 함

요구사항 유형	요구사항 번호	요구사항 명
기능 요구사항 (SFR, System Function Requirement)	SFR-001	평가 최적화 관리
	SFR-002	감독관 – 시험 문항 및 시험지 관리
	SFR-003	감독관 – 수험자 명단 관리
	SFR-004	감독관 – 시스템 사전점검
	SFR-005	감독관 – 시험 진행 관리
	SFR-006	감독관 – 시험 마감
	SFR-007	감독관 – 시험 결과 확인
	SFR-008	수험자 – 환경설정 및 시험 준비
	SFR-009	수험자 – 프로그램 제어 기능
	SFR-010	수험자 – 시행 및 답안관리
	SFR-011	수험자 – 답안 제출 및 종료
	SFR-012	수험용 프로그램 제어
	SFR-013	보안 요구사항
	SFR-014	문제은행 - 시스템 개발
	SFR-015	문제은행 – 문제관리 시스템
	SFR-016	문제은행 – 문제 선정 관리 시스템
	SFR-017	문제은행 – 문제 세트 관리 시스템
	SFR-018	문제은행 – 문제 통계 관리 시스템
	SFR-019	문제은행 – 위원 관리 시스템
	SFR-020	문제은행 – 문항 검토 및 출제, 수정 기능
	SFR-021	IBT시스템 개발 (방향 제시)
안정적 운영을 위한 요구사항	과업추진시 고려사항 참고 (제안 요청)	- CBT시스템 활용 교육 등 제안 (운영요원, 감독관, 수험자) - 추가 종목 신설, 문제 유형 변경 등에 대처할 수 있어야 함 - 150개 고사장 시험 사전점검 및 당일 기술지원 제안 - 호환성 및 운영 안정성 확보 - 산출물에 대한 무상 하자보수 기간 및 유상 유지보수 조건 등 제안 요청

번호	기능 요구	정의	세부내용
SFR-001	평가 최적화 관리	CBT 평가 시행을 위한 최적화 기능	○ CBT솔루션에 구성된 기능을 전산세무회계등 자격시험 CBT시행에 최적화 커스터마이징 ○ 기존 자격시험 관리 시스템과 데이터 연동 시스템 제공 ○ 수험자 PC 최적화 - 방화벽 포트 등록 - 수험자 PC 화면보호, 절전모드 자동 해제 - 화면해상도 자동 설정 - 수험자 화면제어 기능 가동 ○ 수험자 PC 관리 - 수험자 평가프로그램 자동 실행 및 업데이트 기능 - 수험자 PC와 실시간 네트워크 상태 확인 기능 - 수험자 네트워크 장애 발생 시 미접속 표시 기능 - 수험자 평가프로그램 좌석번호 충돌 PC 검색 기능
SFR-002	감독관 – 시험 문항 및 시험지 관리	CBT 평가에 사용할 문항을 등록하고 시험지 생성	○ 문항 등록 및 시험지 생성 - 문항 유형 선택 및 문제 등록 기능 - 문항별 문제 및 선택지 내용 등록 - 문항별 정답 체크 기능 - 작성 문항 미리보기 기능 - 시험명, 급수, AB유형 시험시간 설정 기능 ○ 문제은행 시스템 연동 기능(선택 적용)
SFR-003	감독관 – 수험자 명단 관리	CBT 평가에 응시할 수험자 명단 관리	○ 수험자 명단 엑셀 관리 (자격시험 관리프로그램 연동) - 수험자 명단 양식 다운로드 - 시험장, 시험실 정보 등록 - 수험자 좌석번호, 수험번호, 성명 등 인적 사항 관리 ○ 수험자 명단 등록관리 - 수험자 엑셀 정보등록 오류검증 - 수험자 정보수정, 변경 관리 기능
SFR-004	감독관 – 시스템 사전점검	평가시스템 설치 및 사전점검 기능	○ 평가프로그램 설치 및 환경설정 - 감독관 프로그램 설치 및 자동업데이트 기능 - 수험자 프로그램 설치 및 자동업데이트 기능 - 수험자 PC 접속 및 좌석번호 중복체크 기능 - 감독 PC IP주소 검색 및 직접 설정 기능 - PC부팅 시 수험자 프로그램 자동 실행 기능 ○ 평가프로그램 사전점검 - 점검용 명단 및 문제 배포 기능 - 수험자 PC 네트워크 통신 상태 점검 기능 - 수험자 화면 자동 로그인 실행 기능 - 시험 시작, 자동 답안 체크, 문제이동 기능 - 답안 제출 및 시험종료 기능 - 테스트 답안 수집상태 점검 기능
SFR-005	감독관 – 시험 진행 관리	수험자의 진행상태를 모니터하고 시험 진행 관리	○ 시험 진행 관리 - 수험자 PC 시험 시작 제어 기능 - 시험 시작 시 미 준비상태 수험자 수 표시 - 수험자 멀티 선택 후 진행 명령 처리 기능 - 수험자 진행 상황 모니터링(시험 진행, 답안 풀이) 기능 - 수험자 특이사항(중도 포기, 부정행위 등) 등록 기능 - 수험자 개별 진행, 자리 이동 및 이어풀기 승인 기능 - 수험자리스트 좌석 배치 조정 기능
SFR-006	감독관 – 시험 마감	수험자의 답안수집 상태를 확인하고 시험 마감 및 시험종료	○ 시험 마감 관리 - 평가실별 감독관 PC의 수험자 전체 답안 자동 수집 - 시험종료 시 수험자 종료, 자동 종료(시간 만료) 여부 확인 기능 - 수험자 답안 및 히스토리 강제 수집 기능 - 수험자 최종 답안 제출 시 감독관 저장 답안 비교 기능 - 수험자 PC 네트워크 단절에 대한 유실 답안 확인 기능 - 오류 수험자 답안 USB 백업 관리 (수동 혼용) - 시험종료 후 감독관 PC와 수험자 PC의 문항 Data 삭제
SFR-007	감독관 – 시험 결과 확인	시험종료 후 자동채점 결과 확인	○ 평가 시행 결과 확인 - 수험자별 로그인 및 최종 답안 제출 결과 확인 - 수험자별 풀이 답안 확인 (기능 탑재, 선택 적용) - 수험자별 점수 및 결과 확인 (기능 탑재, 선택 적용) - 응시 결과 다운로드 기능
SFR-008	수험자 – 환경설정 및 시험 준비	수험자가 로그인 후 수험자 유의사항 확인 및 신분 확인	○ 수험자 환경 제어 - 감독관 PC와의 통신 설정 기능 - 네트워크 이상 발생 시 메시지 표시 기능 - 수험자 정보 및 시험지 세트 다운로드 ○ 수험자 로그인 및 시험 준비 - 좌석별 인적 사항 확인 및 로그인 기능 - 로그인 실패 시 안내 기능 - 수험자 주의사항 안내 기능 - 부정행위 안내 기능 - 기타 시험 준비 안내
SFR-009	수험자 – 프로그램 제어 기능	수험자 시험 보안에 필요한 각종 기능제어	○ 수험자 프로그램 화면제어 - 인터넷 검색, 비인가 프로그램 사용 제한 기능 - 작업관리자로 수험자 프로그램 뷰어 최소화 제한 기능 - 시험 중 수험자 뷰어 화면 종료 불가(닫히면 다시 볼 수 있는 기능) ○ 수험자 개별 제어 - 시험 중 이어 풀기 시 남은 시간 자동 처리 기능 - 재시작 시 수험자 PC 남은 시간으로 처리 - 자리 이동 등 오류조치 시 수험생 추가 시간 부여 - 부정행위, 중도 포기, 결시 처리
SFR-010	수험자 – 시행 및 답안관리	수험자 시험 진행 상태 관리	○ 수험자 시험 진행 - 문제와 답안 매체 한 화면에 표시(기본세팅, 분할 비율 선택 조정 가능) - 문제 한 화면에 표시, 저시력자를 위한 확대 기능 - 전체문항 표시 기능 - 문항 바로가기 기능 - 풀이 문항 표시 기능 - 문제 하단에 이전 문항, 다음 문항 바로가기 적용 - 풀이 시간 및 제한 시간 표시
SFR-011	수험자 – 답안 제출 및 종료	수험자 답안 제출 시험종료 관리	○ 수험자 답안 제출 - 답안 제출 시 최종 답안전송 및 저장 기능 - 시험시간 마감 시 최종 답안 자동 전송 및 저장 기능 - 최종 답안 제출 후, 자동 채점 처리(선택 적용) ○ 수험자 시험종료 - 시험종료 후 화면 제한 - 수험자 정보 및 답안 데이터 자동 삭제
SFR-012	수험용 프로그램 제어	수험용 프로그램 케이렙(Kclep) 제어 관리	○ 케이렙(Kclep)의 실행, 종료 답안전송 등을 제어하는 기능 개발 ○ 호환성 및 안정성 확보 - 운영체제(윈도우) 또는 케이렙 업데이트 등 내·외부 환경변화에 따른 프로그램 유지 - 케이렙 및 시험지 뷰어 크기 조절 기능 - 시험 중 서버 장애 또는 네트워크 단절 시 응시 진행을 계속할 수 있어야 하며, 정상 완료할 수 있어야 함.
SFR-013	보안 요구사항	수험자 시험 보안이 필요한 각종 기능제어	○ 시험문제·답안 전송 암호화 처리 ○ 외부 저장매체 사용 금지 ○ 해킹·바이러스 대응 및 긴급 복구 방안 포함 ○ 네트워크 장애 발생 시 시험 진행이 중단되지 않도록 시스템 개발 ○ 장애 대비 기능 지원
SFR-014	문제은행 - 시스템 개발	문제은행 시스템 운영 방향 제시	○ 시험문제를 저장, 분류하고 출제 할 수 있는 문제은행 시스템 개발 - 기존 기출문제의 DB화 지원 및 신규 종목의 시험 데이터(문제, 답안, 결과 등) 문제은행DB 시스템 연계 기능 구현 - 문항수 및 문항 형태를 지정, 출제관리를 위한 서버 운영 및 모니터링 기능 - Windows 최신 버전 및 브라우저 호환 기능 제공 ○ CBT관리 시스템 연동 - 시행 정보별 시험문제 일부 혹은 전체 내보내기 - 시행 정보별 시험 응시 결과 가져오기 - 내보내기/가져오기는 보안/네트워크 장애 상황 대응을 위해 온/오프라인 지원 - 문제은행 시스템은 CBT관리 시스템과의 연동 시 CBT 관리 시스템이 독립적으로 운영 가능할 수 있도록 고려하여 개발(별도 업로드 등 가능) ○ 문제은행 시스템 개발 이후 내부 활용 또는 시험에 직접 활용 병행 선택
SFR-015	문제은행 – 문제관리 시스템	문제은행 문제 출제관리 기능	○ 출제관리 - 문제선정 : 선정제한 조건, 입력수 선정 - 문제선정(안) 출력 - 세트 유형별 정답지 출력 - 시험 확정 이력 현황 조회 - 최종문제지 출력 - 최종문제지 출력 이력 현황 조회 - 최종 문제지 내려받기 ○ 출제계획관리 - 출제계획 등록/수정/조회 ○ 출제의뢰관리 - 출제의뢰 등록/수정/삭제/조회/인쇄 - 출제의뢰 이력 관리 및 현황 조회 ○ 문제유형별 출제의뢰 ○ 문제검토 계획 관리 - 검토 계획 등록/수정/조회 - 과목별 검토 계획 조회 ○ 문제검토 - 문제 조회/수정/PDF 등 출력 - 문제검토 이력 관리/승인 - 문제검토 의견 등록/수정/삭제/조회 - 문제 재검토 등록/수정/삭제/조회/PDF 등 출력 ○ 시험지 양식 관리 - 시험지 양식 등록/수정/삭제/조회/PDF 등 출력 ○ 문제검색 - 문제 또는 보기의 검색 기능 - 문제 또는 보기의 찾기 기능(특정 단어를 찾을 수 있는 기능) ○ 문제 상세정보관리 - 문제 수정 또는 정비 전/후 문제 내용 저장 기능(수정 내용 이력 추적 가능) - 문제 출제/수정/선정 이력 관리 - 문제 난이도 변경 이력 관리 - 세트포함 이력 관리 - 문제 복제 이력 관리 - 검색엔진 연동 유사문제 검색 ○ 문제 수정관리 - 객관식/필기형 문제 수정(미리보기/PDF 등 출력) - 필기형 답안관리 ○ 문제이동 이력 관리 - 문제 분류 이동/검색 일괄 분류 이동/문제 난이도 이동/ 검색 일괄 난이도 이동 등의 이력 관리 ○ 문제 삭제 시 이미 출제되어 있는 경우(미사용분) 삭제 여부를 묻는 팝업창 에서 확인 후 삭제할 수 있는 기능
SFR-016	문제은행 – 문제 선정 관리 시스템	문제은행 문제 선정 관리 기능	○ 유형(세트) 등록 - 세트 자동선정 기능 - 수동세트 구성(세트 문제 추가/삭제/교체/세트 일괄 문항수 관리) - 각종 옵션, 제한 기능 및 적중률 통계 등에 따른 자동 출제 기능 - 동일한 종목 및 급수의 문제를 필요 수에 따라 서로 다르게 배치 기능 - 중요도 및 난이도 별 문제 추출 가능 기능 - 출제 제한 기능(최근에 나온 문제 출제 제한 기능 및 몇년 몇월까지 출제되지 않도록 하는 제한 기능) ○ 유형(세트) 검토 - 세트문항 일괄 폰트/크기 조정기능 - 세트 미리보기 및 출력 - 세트문제 미리보기 및 출력 - 세트문제 상세보기 및 출력 ○ 유형(세트) 선정내역 - 선정유형/선정난이도/정답분포표 조회 ○ 유형(세트) 검토완료 - 세트 검토 완료 등록/수정/삭제 ○ 유형(세트) 조회 - 시험지세트 수정/삭제/추가 ○ 답보기 관리 기능 - 보기 자동 교환 기능 - 보기의 길이에 따른 자동 배열 기능(1줄, 2줄 또는 4줄)
SFR-017	문제은행 – 문제 세트 관리 시스템	문제은행 문제 세트 관리 기능	○ 문제세트관리 - 과목정보관리 : 시험별 필기(학과) 수험과목 정보 조회 - 과목분류정보 : 시험별 과목별 그룹/세목분류 정보 조회, 추가, 삭제, 저장 - 과목추가분류 : 시험별 과목별 추가분류 정보 조회, 추가, 삭제, 저장 - 과목세목변경 : 시험별 과목별 세목 정보 조회, 세목변경, 문항조회 - 문항추출관리_상시 조회, 조건설정, 자동 추출, 조건설정 조회, 과목별 문항 조회, 자동 교체, 수동 교체, 검토 문제 세트 생성 조회, 수험자별 세트 생성, 검토 문제 목록 조회, 수험자별 문항 조회 ○ 문제세트전송 - 문제세트전송내역 : 시험별 시행 회차별 문제 세트 조회 - 문제세트전송관리 : 시험별 시행 회차별 문항 정답 전송내역 조회, 문제 세트 전송 - 시험장별 문제 동기화 : 시험장별 문제 동기화 - 시험장별 시행 회차 동기화 : 시험장별 시행 회차 동기화 - 자동 전송 기능 구현
SFR-018	문제은행 – 문제 통계 관리 시스템	문제은행 문제 통계 관리 기능	○ 문제통계관리 - 보기별응답율 : 시험별 문항별 수험자 수, 정답자 수, 보기별 응답수/률 등을 조회 - 문제보유현황 : 시험별 문제 보유현황을 세목별, 과목별, 자격별, 세목별 조건으로 조회 - 문제교체현황(과목별) : 시험별 자격/과목별 문항의 자동/수동 교체 이력, 교체 사유 등을 종합적으로 조회 - 난이도 조정대상조회 : 시험별 과목별 문항 자료에서 난이도 조정이 필요한 문항 조회 - 위원별 문제검토현황 : 시험별 위원별 문제검토 현황 조회 - 난이도/기준문항별/유형별 현황 조회 - 문제 폐기현황 조회 ○ 문제 난이도 및 적중률 관리 - 문제적중률 조회 / 회차별 문제적중률 조회 / 난이도 반영 기준 등록 / 문제 난이도 반영 ○ 문항 분석 - 문항 분석 결과 조회/출력/EXCEL출력 - 오류 문제 등록 - 위원 패널티 등록
SFR-019	문제은행 – 위원 관리 시스템	위원 관리 기능	○ 위원실적 - 검토현황조회 : 시험별 검토위원으로 등재된 위원별 검토문항 감수/문항상태를 조회 - 출제현황조회 : 시험별 출제위원으로 등재된 위원별 출제문항의 출제수/문항상태 조회 - 문제종합현황 : 시험별 위원으로 등재된 위원별 검토/출제문항의 출제수/검토수/교체수 등을 조회 ○ 위원관리 - 위원현황등록/조회 : 시험별, 위원별 설정 권한 자료 조회, 자격관리 시스템에 등재된 위원 정보를 가져오기(interface)처리 - 출제 권한 설정조회 : 권한 설정, 위원 권한 해제, 검토 권한 설정/조회, 시험별 자격별/과목별 - 검토권한설정 위원 조회 : 검토 권한 설정 위원 - 위원 정보수정 : 위원 기본정보 조회, 위원 비밀번호 설정
SFR-020	문제은행 – 문항 검토 및 출제, 수정 기능	위원 관리 기능	○ 선정문항조회 - 선정문항조회_위원모드 : 정기시험 과목의 자동선제 문항 목록 조회, 선제문항 교체 ○ 문항검토관리 - 문항검토관리_위원모드 : 문항 목록 조회, 문항 검토 대상 조건설정, 문항 보기, 문항 복사, 화면삭제, 다중선택 ○ 문항저작 기능 - 외부 문항 데이터 자동 변환 기능 제공(HWP, QTI 등) - 문제은행 문항 검색 기능 - 문제 등록 시 유효성 검사 기능 (정답 누락, 해설 누락 등) - 문제 등록/수정 시 처음 사용자도 사용할 수 있도록 기능이 간단하고 직관적 이여야 함. / 교육자료 제공 필요 - 채점 유형 자동 지정 - 문항 등록시 문항 자동 분류(AI 기능) - 한 화면에서 여러 개 문항 입력 - 여러 개의 문항을 비교하며 편집 가능 - 작성 중인 문항의 “웹 미리보기 및 응시” 기능 - 문항 풀이 동영상 녹화 기능 - 문항 저작기 라이선스는 사이트 라이선스로 공급. (별도 외부 타 편집기 라이선스는 불필요한 것을 권장) - 다양한 음성/동영상/수식/도형/그래프/이미지 등을 지원하는 문항 편집기 제공 - 문제 유형 지정 . 객관식 선다형/선택형, 주관식 서술형, 그룹 문항 . 정답 단수 및 복수 선택 가능 . 문항 및 답보기 멀티미디어(이미지, 음성, 동영상, 플래시) 등 진흥원에서 요구하는 문제 유형을 모두 지원 - 문항의 이력 확인 기능(문제의 최초 생성 일자부터 수정 일자까지) - 문항의 출제 빈도 및 정답률, 오답률의 통계 기능(과목별 문항으로) - 문항 일괄등록 기능 . 문제 유형이 섞여 있어도 등록할 수 있어야 함. . 중복 등 등록 오류 발생 시 확인할 수 있는 기능 포함.
SFR-021	IBT시스템 개발 (방향 제시)	IBT시스템 운영 방향 제시	○ 모든 시험장에서 모든 IBT시험이 시행될 수 있도록 개발(감독관 프로그램 및 응시자 프로그램) ○ 동일 시험장의 동일 시험 회차에 응시자별로 상이 한 자격시험이 동시 시행될 수 있도록 개발 ○ IBT시스템 개발 후 전국 시험 진행 현황을 실시간 모니터링 - 운영센터에서 수험생 리스트 및 시험지 배부 - 응시인원 및 통계 확인, 실시간 답안 제출 현황 확인 등 - 답안을 중앙서버로 전송 후 직접 관리 ○ IBT 시험 운영을 위한 문제관리 시스템 연계 - 문제 데이터 전송 현황 : 문제관리에서 전송 내역, 시험 일자, 시험장별 조회 - 시험자료 전송 : 시험일자, 시험장별로 데이터 조회, 시험일자/시험장별로 선택되어진 시험자료를 해당 시험장으로 전송 ○ IBT시스템 개발 이후 한국세무사회 측에서 언제든지 시스템을 활용할 수 있어야 함 * 비대면 시험방식은 필수는 아니며, 선택 제안 가능

3. 과업추진 시 고려사항

❍ 과업 실행 전 한국세무사회와 사전 협의 필수

❍ 11월 8일 제2회 세무사사무소 대항 세무회계 경진대회에서 CBT시스템으로 시험 진행할 수 있도록 적극 협조함

❍ 전산세무회계 등 자격시험에 관한 전반적인 이해와 안정성, 추가 종목 신설 등 향후 발전 방향과 확장성에 대한 고려가 충분히 되어야 함

- 시험 명칭 변경 및 추가 종목 신설, 문제 유형 변경 등에 대처할 수 있어야 함

※ 1교시(세무회계1,2,3급, 기업회계1,2,3급) - OMR 답안(약술형 있음)
2교시(전산세무2급, 전산회계2급), 3교시(전산세무1급, 전산회계1급)
각 종목별 시험지는 AB형 교차 배부, 2,3교시는 Kclep 교육용 프로그램을 이용하여 수험용 설치후(Tax.exe) 실행하여 답안 저장 방식

❍ CBT시스템 활용 교육 등 제안 (운영요원, 감독관, 수험자 별)

❍ 시험 사전점검 및 시험 당일 기술지원 제안

- 전국 150여개 고사장 사전점검 및 대응, 기술지원 고사장별 연락

- 장애 접수 및 장애 발생 시 세무사회에 보고 후 실시간 처리

- 시험 중 장애 발생 시 실시간 대처 및 장애 복구(복구 완료 후 조치 결과 등 보고 및 시스템 유지보수 개선)

❍ IBT 및 문제은행DB 시스템 개발과 CBT 연계를 포함하여 제안

❍ 호환성 및 운영 안정성 확보

- 운영체제(윈도우 버전) 또는 케이렙 업데이트 등 내·외부 환경 변화에 따른 안정성

❍ 한국세무사회 자격시험 CBT시스템 개발의 컨트롤타워 역할을 할 수 있는 핵심 인력(총괄 책임자*) 지정 (PT참여 필수)

- 총괄책임자(PM) : 5년 이상 CBT시스템 등 개발 프로젝트 경험자

❍ 각 시스템 개발별 커뮤니케이션 전담 인력 배정 필수 및 참석

❍ 지정된 담당자의 본 과업 업무 투입 비율(%) 명시하여 제시

(사업 상황에 따라 업무 투입 비율이 변동될 경우 상호합의로 조정)

❍ 각 과업 단위별 종료 후 결과보고서 제출

❍ 산출물에 대한 무상 하자보수 기간은 시스템 개발 완료 후 12개월로 함, 유상 유지보수 조건 등 제안 가능

❍ 현안 및 이슈에 따라 과업지시서 이외의 과업 추가 협의 요청할 수 있음

Ⅲ. 입찰 및 평가 관련

1. 평가 일정

❍ 2025. 10. 28.(화) 14:00, 본회 2층 대회의실 (순서 개별 통보)

2. 평가 방법

❍ 제안서 심사 : 우선협상대상자 선정

❍ 협상에 의한 계약

- 기술점수(90%)와 가격점수(10%) 합산 후 고득점순으로 우선협상대상자 선정

- 동점자 발생 시 기술평가 고득점 순으로 선정하며, 배점한도가 높은 항목의 고득점 순으로 우선협상대상자 선정

- 우선 협상대상자와 협상이 결렬될 경우, 차순위 업체와 협상

3. 평가 기준

평 가 항 목		배점한도
기술평가 (90점)	1-1 전문성 ① CBT 개발 경험 ② 우리회 전산세무회계 등 자격시험 및 케이렙에 대한 이해	10
	1-2 과제 이해도 ① 목표 및 내용 이해 수준 ② 제안요청서와의 부합성 ③ 세부과제 식별의 명확성	10
	2-1 신규 개발 ① 사업추진 목표의 명확성 ② 개발 방안의 적정성 ③ 보안 및 안정화 방안의 적정성	20
	2-2 관리 ① 장애복구 및 안정화 방안 ② 시험에 관련된 인력 지원	20
	2-3 실행의 체계성 ① 사업추진 일정의 적정성 ② 참여 인원의 적정성	15
	2-4 제시된 운영방안 평가 ① 문제은행DB, IBT시스템 운영 ② H/W 제안 평가 ③ 지속적인 하자보수 및 유지보수 평가	15
가격평가(10점)		10
총 계		100

4. 일반 사항

❍ 제안사는 본 사업과 관련하여 취득한 업무 내용에 대해 제3자에게 누설해서는 안되며, 발주기관이 요구하는 보안 사항을 철저히 준수해야 함

❍ 제안사가 제출한 자료 및 문서는 비공개 하며, 제안을 위해 소요되는 비용은 입찰참가자의 부담으로 함

❍ 제안 업체는 사업을 이행함에 있어 발생하는 저작권, 사용권 또는 특허 등에 대해 일체 하자가 없도록 조치해야 함

❍ 제안사가 제안한 시스템에 관하여 국내외 지식 재산권과 관련하여 발생하는 모든 책임은 제안사에 있음

❍ 본 제안요청서에 명시되지 않았다 하더라도 원활한 자격시험 운영에 필요한 기능은 반드시 개발 범위에 포함하여야 함. 제안서에 포함하지 않은 경우라도 포함된 것으로 간주함

❍ 시스템 장애, 이상 발생 시 장애 조치 등 신속하게 대응해야 함

Ⅳ. 제안서 작성 및 제출

1. 제출 서류

❍ 입찰공고문 확인 필수

※ 자격에 대한 서류심사에서 결격사유 해당 업체의 경우 제안서 심사에서 제외

※ 기타 제안요청서에 제출토록 명시한 서류(사본은 원본 대조필) 및 입찰참가자격을 증명하는 서류(구비서류 미비 시 접수 불가)

2. 제안서 작성지침

❍ 사업 전반에 대한 이해와 구체적인 내용을 포함한 제안서를 제출해야 함

❍ 제안서 목차와 작성 요령에 따라 작성하되, 본 지침(안)에 예시되지 않은 사항이라도 본 과업 수행에 필요하다고 인정되는 항목 및 내용 등을 추가하여 제안(추가 발생 비용 포함 제출)

❍ 제안서 규격

- 전체 분량은 100매 이내(PT용 요약본 PPT 파일 별도 제출)

- 제안서 자료 : USB 제출(PPT 또는 PDF 파일)

❍ 제안내용의 요약본 1페이지 포함(맨뒷장)

❍ 인용 자료 및 데이터의 출처 명시

❍ 비율 산정 시에 소수점 첫째 자리까지 기재(둘째 자리에서 반올림)

❍ 금액의 경우는 제시한 금액 단위 이하는 버림

❍ 반드시 쪽 번호(Page)를 기재

❍ 모든 증빙자료는 제안서와 1권으로 합철하고, 별도 목차를 작성

❍ 가격제안서 및 산출내역은 밀봉하여 입찰서류 접수시 별도 제출

3. 제안서의 효력

❍ 제안서의 내용은 제안자가 계약자로 선정된 후 계약서에 명시되지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가짐. 단, 계약서에 명시한 경우는 계약서 사항이 우선함

❍ 본 제안요청서의 전체 또는 일부를 제안서 제출 이외의 다른 목적으로 사용할 수 없음

❍ 제안사는 본 제안요청서에 제시된 정보의 정확성에 대해 스스로 확인할 필요가 있으며, 제안요청서나 기타 첨부 자료상의 오류나 누락에 대하여 한국세무사회는 책임지지 않음

❍ 한국세무사회는 필요시 입찰 참가자에 대하여 추가 제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐

4. 유의사항

❍ 우선 협상 대상으로 선정된 자는 한국세무사회의 보안 요청을 준수해야 함

❍ 제안서의 내용을 허위로 작성한 사실이 발견되거나 제안된 내용을 충족시키지 못하는 경우 제안사에 일체의 손해에 대한 배상 책임이 있고 계약을 무효로 할 수 있음. 또한 부정당업자 지정 등 관련 회규에 따른 제재를 받게 됨

❍ 본 입찰과 관련하여 제출된 제안서 등 서류 일체는 반환하지 않으며, 보관상 어려움 등의 이유로 파기할 수 있음

❍ 평가 위원 명단, 평가 내용, 협상 결과 등은 공개하지 않으며, 입찰 참가자는 평가 결과에 대해 이의를 제기할 수 없음

❍ 계약 후 제안서의 용역 범위 및 세부 추진내용이 당초 계획과 달리 여건 및 특성에 부합되지 않는 경우는 상호 합의로 현실에 맞게 적절히 수정하여 추진

❍ 본 제안요청서에 명기하지 않은 사항이라도 사업 수행 과정에서 불가피하거나 응당 시행해야 할 업무는 당연히 포함된 것으로 함

❍ 입찰에 참가하고자 하는 자는 입찰 관련 사항을 완전히 숙지하여야 하며, 이를 숙지하지 못한 책임은 응찰자에게 있음

❍ 본 제안요청서에 명시된 모든 조항은 최소한의 사항만을 규정하였으므로, 누락 된 사항에 대해 문제가 발생하지 않도록 사업자가 사전 조치를 취해야 함

❍ 기타 사항은 제안요청서에서 정하는 바에 의하며, 동 요청서에서 정하지 않은 사항은 계약예규 협상에 의한 계약체결 기준과 한국세무사회의 유권해석에 따름

5. 문의사항

❍ 과업 내용, 제안서 관련

- 한국세무사회 자격시험팀 02)521-8398, license@kacpta.kr

❍ 입찰 프로세스 관련

- 한국세무사회 재무회계팀 02)587-6020

※ 입찰 관련 서식(붙임)

[서식 1] 입찰참가신청서

[서식 2] 확약서

[서식 3] 보안각서

[서식 4] 사용인감계

[서식 5] 개인정보 수집‧이용 및 제공동의서

[서식 6] 제안사 현황

[서식 7] 참여인력 현황

[서식 8] 가격제안서(제안가격 상세산출 내역 포함)

【제1호 서식】

입 찰 참 가 신 청 서 * 아래 사항 중 해당되는 경우에는 기재하시기 바랍니다.					처리시간
					즉 시
신청인	상호 및 법인명		법인등록번호
	주 소		전 화 번 호
	대 표 자		주민등록번호
입찰개요	입찰공고 번호	공고 제2025-015호	입 찰 일 자	2025. 10. 28.
	입 찰 건 명	한국세무사회 자격시험 CBT시스템 개발
입찰보증금	보 증 금 율	10% 이상
	금 액	금 원정 (￦ )
	납 부 방 법	입찰보증보험증권
대 리 인 ․ 사 용 인 감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성 명 : 주민등록번호 :		본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 : □
본인은 위의 번호로 공고한 귀 회의 일반경쟁입찰에 참가하고자 입찰유의서 및 입찰공고 사항을 모두 승낙하고 별첨서류를 첨부하여 입찰참가 신청을 합니다. 신청인 : □ 한국세무사회 귀중
[붙임서류] 1. 제안서(원본 1부, 사본 5부) 및 파일(USB) 2. 국세 및 지방세 완납증명서 각 1부 3. 사업자등록증 또는 법인등기부 등본 사본(원본대조 필) 1부 4. 입찰보증보험증권 5. 인감증명서 1부 6. 별지 제1호 서식 ~ 별지 제8호 서식 각 1부 7. 사업실적 1부(실적증명서 등 증빙) 8. 기타 신청인의 제안에 필요한 추가 자료

【제2호 서식】

확   약   서

○ 입찰건명 : 한국세무사회 자격시험 CBT시스템 개발

한국세무사회 자격시험 CBT시스템 개발의 업체선정 방식 및 제안요청서 내용과 본 입찰에 관련된 귀 기관의 방침에 이의가 없으며, 작성한 내용이 사실과 다름이 없음을 확약합니다.

2025년     월     일

주             소 :

상 호 또 는 명 칭 :

대      표     자 :                       (인)

법 인 등 록 번 호 :

한국세무사회 귀중

【제3호 서식】

보 안 각 서

본인(본 업체)은 『한국세무사회 자격시험 CBT시스템 개발』사업 참여와 관련하여 다음 사항을 준수할 것을 각서로 제출합니다.

1. 본인은 본 사업에 대한 제안 참여에 있어 제안요청서상의 제반 보안사항을 철저히 이행하겠으며,

2. 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 야기 시켰을 경우에는 보안관계 제 법규에 의거 처벌 받음은 물론 어떠한 제재 조치를 취하여도 이의를 제기하지 않을 것임.

2025년    월    일

주             소 :

상 호 또 는 명 칭 :

대      표     자 :                       (인)

법 인 등 록 번 호 :

한국세무사회 귀중

【제4호 서식】

사 용 인 감 계

법인인감			사용인감

위 인감은 『한국세무사회 자격시험 CBT시스템 개발』입찰 참가 신청 시부터 추후 심사에 따른 협력사로 선정하여 업무를 수행하는 과정에서 귀 회에 제출하는 제반서류에 사용하겠으며 위 인감사용으로 말미암아 법률상의 모든 책임은 본 신청자가 질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

붙임 : 법인인감증명서 1부.

2025년   월   일

신 청 자 :

주    소 :

대표이사 :

한국세무사회 귀중

【제5호 서식】

개인(신용)정보 수집‧이용 및 제공동의서

「개인정보보호법」제15조 및 제22조,「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제32조 및 제33조에 따라 한국세무사회가 아래와 같은 내용으로 본인의 개인(신용)정보를 수집‧이용하는 것에 동의합니다.

( 동의함 □   동의하지 않음 □ )

□ 수집항목

◦ 개인식별정보

- 성명, 주민등록번호, 휴대전화번호, 인감증명서에 기재된 사항

- 사무소 정보(명칭‧대표자명‧사업자등록번호‧주소‧전화번호‧팩스번호 등)

- 거주지 정보(주민등록주소‧전화번호‧휴대전화번호‧전자우편주소 등)

□ 수집‧이용 목적

한국세무사회는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다

◦ 공정한 사업자 선정에 필요한 정보 확인

◦ 사업의 원활한 수행 및 평가를 위한 개별 연락 등

□ 개인(신용)정보의 보유‧이용 기간

◦ 위 개인정보는 수집‧이용에 관한 동의일로부터 보유목적 달성 시 또는 정보주체가 개인정보 삭제를 요청할 경우 지체 없이 파기합니다.

◦ 단, 사업종료일 후에는 사업의 사후관리만을 위하여 보유‧이용되며 보존기간은 선정평가일로부터 이후 5년까지입니다.

( 동의함 □   동의하지 않음 □ )

※ 귀하는 상기 동의를 거부할 수 있습니다. 다만, 필수적 정보의 수집‧이용에 대한 동의를 하시지 않을 경우에는 한국세무사회가 실시하는 입찰에 참가할 수 없습니다.

( 동의함 □   동의하지 않음 □ )

※ 본인은 개인(신용)정보 수집‧이용, 제공 동의에 관련된 설명을 읽고 충분히 이해하였습니다.

2025 년    월     일

작 성 자 :              (인)(또는 서명)

한국세무사회 귀중

【제6호 서식】

제안사 현황(회사연혁 및 일반현황)

회 사 명		대표자
사업자등록번호
주 소
사업책임자	성명(직위): 휴대폰: 이메일 :
회사설립년도	년 월
해당부문사업기간	년 월 ～ 년 월 ( 년 개월)
주요연혁
* 최근 2년 이내 주요 실적 - CBT 사업 관련 부문(CBT, IBT, 문제은행 등) 기술

【제7호 서식】

참여인력 현황 (예시)

□ 참여인력 편성표

총괄 책임자

부문			부문			부문			부문
책임자 : 담당자 :			책임자 : 담당자 :			책임자 : 담당자 :			책임자 : 담당자 :

※ 1. 부문별 책임자 명시

2. 위탁사업 수행조직 및 인원현황은 실제로 사업에 직접 투입 인력 기재

3. 위탁사업 수행조직 및 인원의 본 과업에 대한 업무 투입 비율 기재(%)

□ 참여인력 현황

가. 수행조직 및 인원현황

나. 투입인력

분야	성명	연령	근무경력	직위	담당업무	주요업무 수행능력	자격증	기술 등급
총괄 책임자
부문
부문
부문
부문

※ 1. 자격증 및 참여 인력 증빙서류(경력증명서와 건강보험자격득실확인서 등 4대

보험가입증명서) 사본 첨부

2. 연령 및 근무경력은 공고일 기준 기재

3. 사업총괄 책임자는 반드시 투입률 100%(전담) 가능자로 인선하여 기재

4. 기술등급 : (특급) 12년 이상, (고급) 9~11년, (중급) 6~8년, (초급) 5년 이하 기준작성

【제8호 서식】

가 격 제 안 서
용 역 명		한국세무사회 자격시험 CBT 시스템 개발
용역기간
제안금액		일금 원정 (￦ , 부가세포함)
신청자	상호/법인명			법인등록번호
	주 소			전화번호
	대 표 자			생년월일
	담 당 자	소속부서		휴대전화
		전화번호		E-mail
상기 금액으로 가격제안서를 제출합니다. 붙 임 : 제안가격 상세산출내역(견적서) 1부. 2025년 월 일 제안자 : (직인) 한국세무사회 귀중

* 가격제안서는 상세산출 내역(견적서)과 함께 밀봉·날인하여 제출

【붙임】

제안가격 상세산출 내역 (예시)

구분	항목	내용	단위	수량	단가	금액
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
합 계
총 계

○ 위 상세 산출서에 하자보수, 유지보수 기간 및 조건을 포함하여 제안하여 주십시오.